문서번호	시설과-1202
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
양지윤	홍순철	변규열		04/11 이춘희
협 조
	주무관		김승환
	주무관		윤유환
	주무관		최종성

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사』 예비준공검사 결과 보고

2014. 4.

동부공원녹지사업소

시   설   과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(	열람공고,주민설명회 시행	)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(	아이랜드 의견수렴 등	)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(	전문가 자문 시행	)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	광진구청	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유□	(	시설관리공단	)	무 ■

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사』

예비준공검사 결과 보고

우리사업소에서 추진 중인「어린이대공원 놀이동산 재조성공사」관련하여 외부 전문가와 합동으로 예비준공검사를 시행하고 아래와 같이 보고 드림

예비준공검사 개요

○ 일  시 : 2014. 4. 9(수) 14 : 00 ~ 17 : 00

○ 공정률 : 93%

○ 검사자

▶ 외부전문가 : 더원개발(주) 대표 양동종(건축), ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규(토목), 선진엔지니어링 이사 오영섭(조경)

▶ 발주처 : 건축/토목/조경/기계 분야별 업무담당

▶ 감독처(시설관리공단) : 건축/토목/조경/기계 분야별 감독

▶ 시공사 : 건축/토목/조경/기계 분야별 현장소장

주요내용

구 분	내 용	비 고
건 축	▶ 1층 여자화장실 바닥 구배 불량 ▶ AL창호 코킹작업시 중간에 백업재 충진하여 결로 최대한 예방 ▶ 페인트 면처리 보완 ▶ 화장실동 커텐박스 추가 ▶ 외부 목재루버 창문 상,하부 한줄 추가 ▶ 화장실 창 하부 SUS후레임 설치 ▶ 화장실동 카페 출입구(바닥) 물처리 보완

구 분	내 용	비 고
토 목	▶ 놀이공원 입구에서 힝단 U형 배수로 설치, 추가 배수계획 수립 ▶ 기 설치한 U형 측구가 개방되어 있어 공사장 근로자 보행 시 안전사고 우려있으므로 조치바람
조 경	▶ 야외스텐드 - 물구멍 위치 하부로 이동(현재 H=400) - 물구멍에서 나온 걸레받이 형태로 물 유도 ▶ 경계석 주변으로 잔디1장 정도 시공후 관목식재 ▶ 황토포장 Ramp 조정 - Ramp의 경사가 너무 급하므로 목재계단으로 검토 요망 ▶ 수크령 Seeding은 준공을 고려하여 Pot식재 검토 요망 ▶ 화장실동과 접하여 플랜터 빗물처리 및 물구멍 보완

처리의견

○ 공사감독처(시설관리공단)에 지적사항 통보하여 시정조치 후 준공처리하도록 조치

○ 외부 전문가 수당지급

붙임 1. 외부전문가 의견서 분야별 각 1부.

2. 발주처·감독처 의견서 1부.  끝.