문서번호	토목부-14857
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	07/17 김영수
협조
	환경시설과장		유현수

교량 변경설계 용역 검토보고

- 세운상가 청계천 연결 보도교 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

도시기반시설본부

(토목부)

교량 변경설계 용역 검토보고

- 세운상가 청계천 연결 보도교 -

건축부에서 시행중인「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사」중  “청계천 연결 보도교”의 교각 기초 하부 지장물 이설 불가로 인한 교량 변경설계 용역 추진 검토보고임.

▢ 관련근거

○ itm 916 제17-0581호(2017.7.12.) : 현장 실정보고

- 교량변경 설계용역 시행 검토의견서 제출

▢ 공사개요

○  위   치  : 세운상가~청계,대림상가

○  규    모  : 청계천 연결 보도교(연장 55m, 폭 8m)

○  공사기간  : '16. 3. 24. ~ '17. 8. 23

○  시 공 사  : 성보산업㈜외 1

○  감 리 사  : 아이티엠코퍼레이션외 1

▢ 관련 추진경위

○ 2016. 7. 7.~ 7.13 : 교각 기초 위치 터파기(지장물 확인) 실시

○ 2016. 7.14 : 유관기관 합동 지장물 확인

○ 2016. 7.25 ~ 7.26 : 유관기관 협의 (한전,KT,SK,LG,에스코)

- 설계 교각 위치는 지장물 다량 및 이설공간 부족으로 기초 설치 불가

○ 2016. 9.02 ~ 9.08 : 기초설치 가능구간 지장물 확인 추가 터파기 실시

○ 2016. 12.15 : 청계천 연결브릿지 사업계획변경 검토보고(건축부-17737)

- 교각 위치변경 및 교량 경간장 증가 등의 변경설계 비용 반영

▢ 건설사업관리단 보고내용

○ 검토의견

- 청계천 연결보도교 당초 교각 하부 지장물 이설 불가로 부득이 교각 설치 가능 위치로 교량 재설계가 불가피한 실정임.

- 추가 터파기 실시 후 지장물 육안 확인 결과에 따른 교각 위치 및 교량 상부구조 변경 등 재설계 용역비 반영은 타당함.

○ 교량 재설계 용역 현황

- 과 업 명 : 세운상가 공공공간 조성공사 청계천 연결 보도교 변경설계 용역

- 설 계 사 : 제일엔지니어링종합건축사사무소

- 계약방법 : 하도급계약(시공사 - 설계사)

- 과업범위 : 청계천 연결 보도교

- 과업내용 : 교각 위치 변경에 따른 교량 전면 재설계

- 과업기간 : 2016.10.5.~2017.1.3.(착수일로부터 90일)

- 설계금액 : 100,000,000원(VAT별도)

▢ 공사비 증감 대비표

공 종	도급공사비(천원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
설계용역비	-	100,000	100,000
부가가치세	-	10,000	10,000
합 계	-	110,000	110,000

▢ 조치계획

○ 청계천 연결 보도교의 당초 설계 교각 위치는 지장물 과다 및 이설공간 부족 등으로 기초 설치가 불가하여 지장물 재조사를 실시하여 교량을 전면 재설계한 사항으로서,

○ 변경설계 용역비를 반영하고자 하는 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하므로 승인하고, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.