시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	강남순환도시고속도로 8공구 준공기한 연기 의견 회신

1. 토목부-5653호(`14.3.25)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 준공기한 연기(`14.5.30→`18.7.31)에 대한 우리부서 의견을 아래와 같이 회신하여 드립니다.

○ 강남순환도시고속도로공사 8공구는 과천시구간 도시관리계획결정 및 실시계획인가 지연에 따라 준공기한(`14.5.30) 연기는 불가피하다고 판단됩니다.

○ 다만, 민자접속구간은 개통 목표시기인 `16.5월까지 완료하여 강남순환도시고속도로 개통에 지장없도록 공정관리에 철저를 기하시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박운용		간선도로계획팀장	김기용		도로계획과장	전결 04/11 형태경
협조자
시행	도로계획과-4713	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	02)2133-8078	/전송	02) 2133-0763	/	parktiger93@seoul.go.kr	/	대시민공개