급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		주무관	시설관리과장			결재
박행종		서규석	07/20 김기상
협 조

영등포구 관내 상수도공사 추진 중 아래와 같이 공사기한 연기 변경사유가 발생하여 보고합니다.

2017.  7.   .

직 지방시설주사보 성명: 박행종

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	**********	김문자	2017.7.4 ~ 2017.7.14	신설-110	D=30mm, L=3m	㈜한국바텀 애쉬건설

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 수요가의 현장 여건(건축공사 자재적치)으로 인한 공사기한 연기

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
1	**********	2017.7.4 ~ 2017.7.14	2017.7.4 ~ 2017.8.10	공사 연기 시행

붙임 급수공사 준공연기원 1부.  끝.