투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	‘서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 기계설비공사’ 공사기간 연장 의뢰

1. 설비부-12459(2017.7.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 기계설비공사’ 공사기간을 아래와 같이 연장 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경(공사기간 연장) 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공 사 명	서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 기계설비공사
계약기간	2017.02.20.~2017.07.31.	2017.02.20.~2017.08.12.	12일 연장
계약금액	783,581,200원	783,581,200원	변경 없음
계 약 자	삼원플랜트컨설턴트 주식회사

나. 변경사유 : 선행 공정인 건축공사 준공기한에 맞추어 후속 공정인                                  기계설비 공사기간 연장

붙임  1. 공사기간 연장 검토 보고서 1부.

2. 관련 문서(합의각서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	07/20 권오식
협조자
시행	설비부-12519	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개