투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급계약 사항 알림【서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사-강합성라멘교】

1. ㈜삼보기술단 서남권(감) 제2014-83호(2014. 4. 9)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인『서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사』와 관련하여 하도급 계약 사항이 변경되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급계약 사항

구 분	구 분 (하도급공종)	원도급자	하도급사	하도급 기간	도급액(원)	하도급액(원)	하도급율	비고
당 초	강합성라멘교 제작 및 설치	대지건설(주) 신 상 길	㈜승일토건 박 영 온	‘13.06.26 ~’14.09.29	2,403,000,000	2,303,400,000	95.84%
변 경				‘13.06.26. ~‘15.02.28	2,403,500,000	2,303,400,000	95.84%

붙임 : 건설공사의 하도급변경계약 통보서  1부 .(별도 송부).  끝.

	토목부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	04/14 노우성
협조자
시행	토목부-7049	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2578	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개