투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	T.A.B용역 변경계약 의뢰(난지물재생센터 환경개선 설비공사)

우리 본부에서 시행 중인「난지물재생센터 환경개선 설비공사」T.A.B용역에  대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 난지물재생센터 환경개선사업 T.A.B용역(1차)

나. 변경 내용

구 분	계약 차수	계약번호	계약금액(원) (변경없음)	납품 기한		비고
				당 초	변 경
T.A.B	총차	-	52,850,000	‘19.12.31	‘19.12.31
	1차	20160830557	12,000,000	‘17.7.30	‘17.12.31

다. 계약자 : 주식회사 주원엔지니어링, *******

라. 연기사유 : 선행공정 지연으로 준공시기 미도래

마. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 1) 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2) 연기 요청 공문(감리)

3) 합의서  각 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	여인웅		설비부장	07/25 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-12796	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)