	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보[여의도 지하벙커 개선공사 건설사업관리용역]

1. 건축부-12017(2017.7.12)의 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 [여의도 지하벙커 개선공사 건설사업관리용역] 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경
	총차	2차	총차	2차
계 약 자	㈜상엔지니어링건축사사무소 외 1개사		변경없음
계약금액	135,256,500	24,420,000	166,000,000	56,280,000
준공기한	2017.07.23	2017.07.23	2017.09.30	2017.09.30

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	김용범		경리과장	최정수		건설총괄부장	07/26 이상국
협조자
시행	건설총괄부-17443	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2374	/전송	02-3708-2327	/	kim389@seoul.go.kr	/	부분공개(6)