투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	서남권 돔구장앞 중앙정류소 확장 가로등 및 신호등공사 준공기한 연기 변경계약(2차) 요청

우리사업소에서 시행 추진중인 「서남권 돔구장앞 중앙정류소 확장 가로등 및 신호등공사」와 관련하여 감리단((주)건영이앤씨)에서 토목공사(도시기반시설본부 시행)지연으로 인한 공기연장(2차) 요청이 있어, 준공기한 연기 변경계약(2차)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공  사  명 : 서남권 돔구장앞 중앙정류소 확장 가로등 및 신호등공사

2. 계약금액 : 금71,891,480원(금칠천일백팔십구만일천사백팔십원)

3. 도급계약자 : (주)덕양이앤이 대표자 원유송

4. 착공년월일 : 2013.12.23

5. 당초준공년월일 : 2014.05.07

6. 변경준공년월일 : 2014.12.31

7. 준공기한 연기사유 : 선행공정인 토목공사(도시기반시설본부 시행) 지연

8. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙                           버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 서남권 돔구장앞 중앙정류소 확장 가로등 및 신호등공사 실정보고(준공기한 연장2차) 조치계획 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 감리업체 실정보고(준공기한연장 2차) 공문 1부.  끝.

	기전과장
★주무관	양상규		주무관	한영호		기전과장	04/14 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-4540	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개