투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기계설비공사 1차 공사기간 연장 의뢰(서울혁신파크 1단계 조성 기계설비공사)

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울혁신파크 1단계 조성 기계설비공사(1차)’ 공사기간을 아래와 같이 연장 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서울혁신파크 1단계 조성 기계설비공사(1차)

나. 계 약 자: ㈜엘케이엔지니어링 외 2개사

다. 변경내용

구 분		당 초	변 경	비 고
공사기간	총 차	2017.01.02.~ 2017.07.31.	2017.01.02.~ 2017.07.31.	변경 없음.
	1차	2017.01.02.~ 2017.04.01.	2017.01.02.~ 2017.07.31.	121일 연장
계약금액	총차	1,627,184,000원	1,627,184,000원	변경 없음.
	1차	100,000,000원	100,000,000원

라. 변경사유: 선행 공정지연에 따른 기계설비공사(1차) 공사기간 연장

마. 귀책기관: 서울특별시도시기반시설본부

붙 임 : 1) 1차 공사기간 연장 검토 보고서  1부

2) 관련 문서(동의서 포함)  1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		환경설비과장	여인웅		설비부장	03/20 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-4445	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개