상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	두산건설(주)
(경유)
제목	사업추진 약정에 따른 실시협약 체결 등의 기한 연장 알림

1. 항상 시정에 협력해 주셔서 감사합니다.

2. 「마곡지구 분산형 전력망 구성을 위한 연료전지 발전시설 용지 사용허가 및 집단에너지 열 에너지 구매」 사업추진 약정서(서울특별시 녹색에너지과-723, 2017.1.13.) 및 두산건설-2017-3432호(2017.05.29.)와 관련됩니다.

3. 우리시와 귀 사가 체결한 사업추진 약정서에 따라 REC 및 열 구매계약 체결, 실시협약 협의 및 체결을 ’17. 5.까지 하기로 서로 합의하였으나,

4. 의무구매자의 REC 계약 관련 산자부 지침 변경 및 시설계획 변경 협의 등 내·외적인 요인을 고려하여, 사업추진 약정서 제11조제1항의 단서 및 귀 사의 요청에 따라 다음과 같이 관련 계약·협약 체결기한 연장 승인을 알려드립니다.

< 사업추진 약정서 변경 사항 >

가. 관련조항: 제11조(실시협약의 체결) 제1항 및 제1항 가호, 다호

나. 변경사유: 의무구매자의 REC 계약관련 산자부 지침 변경

시설계획 변경(당초 20MW → 30MW)

다. 변경사항: 관련 계약·협약 기한 2개월 연장

구분	변경 전	변경 후
REC 및 열 구매계약 체결 기한	2017년 5월까지	2017년 7월까지
실시협약 협의 및 체결	2017년 5월까지	2017년 7월까지

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이종원		신재생에너지팀장	이노성		녹색에너지과장	전결 05/31 가길현
협조자
시행	녹색에너지과-10651	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개