문서번호	방재시설부-13326
결재일자	2017.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
이원영		代이원영	07/28 남궁용
협 조

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

만리동 광장 불량토 치환에 대한 실정보고 검토보고

2017. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

만리동 광장 불량토 치환에 대한 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」만리동 광장 불량토 치환에 대한 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-537호(2017.07.24.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.10.31.

□ 보고내용

○ 만리동광장 블럭포장면 기반 조성시 폐기물 및 식재 부적합 토양을 배양토 충진과 현장 유용토로 치환하였음.

○ 만리동광장 불량토 치환 현황

치환작업 현황	폐기물 검측

O  검토수량

공 종	당 초			변 경			비 고
	규 격	단위	수 량	규 격	단위	수 량
만리동 광장 불량토 치환
토사절취(터파기)			-	기계, 굴토	㎥	701
사토처리(운반)			-	덤프, 30Km	㎥	701
되메우기(치환)			-	기계, 유용토	㎥	627

O 공사비 대비표

(금액단위 : 천원)

공 종	단위	변경전			변경후			증 감	비 고
		수량	단가	금 액	수량	단가	금 액
만리동광장 불량토 치환공사
Ⅳ 부대토목
Ⅳ-1. 토공사
만리동광장
토사절취(터파기)	㎥			-	701		455	+) 455
사토처리(운반)	㎥			-	701		9,706	+) 9,706
되메우기(치환)	㎥			-	627		2,926	+) 2,926
소 계				-			13,087	+) 13,087
직접공사비				-			13,087	+) 13,087
제경비				-			4,551	+) 4,551
공급가액				-			17,638	+) 17,638
부가가치세				-			1,763	+) 1,763
도급 공사비				-			19,401	+) 19,401

□ 건설사업관리단 검토의견

서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)중 만리동광장 투수블록 포장면 토공 및 식재작업 과정에서 기존건축물의 기초구조물과 혼합폐기물이 출현하여 현장 검측후 만리동광장 설계수종인 대왕참나무 열식 구간을  중심으로 평균토심 800mm 깊이로 굴토하고 현장 유용토 및 수목 식재용 배양토(식혈 구간)를 이용하여 치환한 사항으로 포장면 다짐 뿐만 아니라 수목 생육에도 필요한 작업으로 수거된 생활폐기물은 적법한 절차에  의해 처리하였으며 배양토 충진 수량(74㎥)은 수목 식재공종에 별도  반영할 예정이며 현장 사토 및 치환에 대해 실정 보고 하고 추후 설계  변경에 반영 하고자 함.

□ 보고자 의견

○  “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)”중 「만리동 광장 불량토 치환 」에   대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 공사비에 대하여는 신규단가 협의를 통해 재조정하여 향후 설계변경 시 정산조치하고자 함.

붙 임  건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.