시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 요청(방학동 두레주택 시설보완공사 기간 연장)

우리 시에서 추진 중인 「방학동 두레주택 시설물 보완공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연장 내역

건 명	계약상대자	계약금액	계약기간		비고
			당 초	변 경
방학동 두레주택 시설물 보완공사	㈜동네목수	9,479,100원	′14.3.17~4.15	′14.3.17~4.30	15일 연장

※ 계약금액 변경 없음

나. 연장 사유 : 추가공사 발생으로 인한 공기 연장사유 발생

따로붙임 1) 용역 준공기한 연기방침서 1부.

2) 연기의뢰서 1부. 끝.

	주거환경과장
주무관	임동수		주거환경관리팀장	양준모		주거환경과장	04/14 최성태
협조자
시행	주거환경과-3399	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 31 서울시청 주택정책실 주거환경과	/
전화	02-2133-7255	/전송	02-2133-0753	/		/	대시민공개