	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 물량변경 요청(마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사)

우리 본부가 공사 시행 중인『마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사』의 관급자재(금속제창)에 대해 아래와 같이 물량변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 물량변경 요청내역

계약번호 (납품요구번호)	품명	규 격 (물품식별번호)	단위	변경전	변경후	증감	계약자
00157050804 (12-17-1-12469-00)	금속제창	SN-ACW-E(100) (22888122)	kg	15061	10499.29	감 4561.71	㈜선우시스
00158203002 (12-17-1-12470-00)		HS235D (22386127)		75.40	0	감 75.40
		SN-AW-SC01 (22738977)		7.20	66.12	증 58.92
		SN-AG-01 (22744062)		727.40	1670.28	증 942.88

나. 물량변경 요청사유 : 현장여건(설계) 수요량 변동 발생

붙임 : 1. 관급자재 물량변경계약 검토보고 1부.

2. 관급자재 물량변경(규격변경)계약 요청 공문(건설사업관리단) 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정재철		건축총괄과장	박범규		건축부장	08/04 김진용
협조자	주무관	代이호경
시행	건축부-13500	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2604	/전송	02-3708-2659	/	arc44136@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)