문서번호	고도정수반-699
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
라승보	이임섭	윤석우		전결 04/14 정득모
협 조

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

감리용역 설계변경 검토 보고

2014. 4.

상수도사업본부

(시설안전부)

작성자	부장 : 윤석우 (☎3146-1501) 반장 : 이임섭 (☎ 1450) 담당 : 라승보(☎1456)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

감리용역 설계변경 검토 보고

“올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 전면책임감리용역” 책임감리원으로부터 기존관 무단수연결공법 적용으로 인한 공기연장에 따라 감리원 투입 계획 변경 및 준공기한 연기 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 전면책임감리용역

○ 용역개요 : 송수터널(shield TBM)D=2600mm,1,426m

송수관 부설 D=1,500mm, L=1,511m

○ 용역기간 : ’11.10.21 ~ ’14.04.13(4차분 : ’14.03.11 ~ ’14.04.13)

○ 용 역 비 : 847,884천원(4차분 : 58,084천원)

○ 감 리 사 : (주)건 화

□ 감리원 투입 계약 내용

분 야		등 급	투입계획, 인･월		투입기간
			인	월
책임감리원		감리사	1	28.57	’11.10.21 ~ ’14. 4.13
보 조 감리원	토목	감리사보	1	28.57	’11.10.21 ~ ’14. 4.13
	토목	감리사보	1	2	’14. 2.13 ~ ’14. 4.13
	용접감리	감리사	1	5.27	’13. 6.01 ~ ’14. 4.13
기술지원감리원		감리사	1	28.57	’11.10.21 ~ ’14. 4.13

□ 책임감리원 실정 보고 내용

○ 감리원 투입계획 변경 및 설계변경 사유

※ 관련문서 : 감리용역 변경 실정보고(건올감 2014-119, 2014.4.10.)

- 공사기간 연장(’11.9.8. ~ ’14.4.5. → ’11.9.8. ~ ’14.6.30.)

○ 변경내용

- 기간

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총괄분	’11.10.21~’14. 4.13	’11.10.21~’14. 6.30	증 2.57개월
4차분	’14. 3.11~’14. 4.13	’14.3.11~’14. 6.30	증 2.57개월

- 용역비                                                      (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총괄분	847,884	942,900	증 95,016
4차분	58,084	153,100	증 95,016

※ 공사비 증감                                                (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	15,469	17,414	증 1,945	무단수공법 적용
관급비	949	951	증 2
폐기물처리비	108	109	증 1
계	16,526	18,474	증 1,948

▶ 감리대가 기준에 따른 감리비 산출 : 감리사기준 73.33인․월, 966백만원

- 공사비 증액에 따른 감리비 산출 결과 118백만원 증액 되나 다음과 같이 최소한의 인력배치로 95백만원 증액

․ 상수도관 용접작업이 시행되는 5월 31일 까지 용접감리 반영

․ 연장 감리기간 비상주 감리원 감리비 무대처리

․ 감리사 대가를 감리사보 대가로 반영처리

․ 감리원 배치 계획표

○ 책임감리원 의견

- 본 용역을 위와 같이 변경하여 안전 및 품질 관리등 원활한 감리업무 수행이 될 수 있도록 조치함이 타당할 것으로 사료됨.

□ 공사관리관 검토 의견

○ 금번 설계변경은 기존관 연결 무단수공법 적용에 따른 감리용역 기간 연장과 이에 따른 감리비 증액에 대한 사항으로

○ 보조감리원(토목) 2인중 1인은 현재 잔여공종이 기존관 연결과 수직구 관로 부설작업 등 위험도가 높아 안전관리 전담 감리원으로 계속유지, 잔여공종의 안전관리 강화를 위해 투입이 필요하다고 판단되며,

공사장 안전사고 재발방지 개선대책(행정2부시장 방침 제318호, 2013.10.17.) Ⅲ장, 3.시공분야, 개선방안 『감리단에 안전전문가를 추가 배치하여 검토기능을 강화하고.........』

○ 용접감리는 시점부 Line stopping작업, D2200mm 밸브설치와 배수지앞 기존관 연결작업 등 중요한 공종이 진행되므로 품질관리를 위해 5월 말까지 투입되어야 한다고 판단되므로,

○ 감리기간 연장에 대해서는 우선 변경계약 하고, 계약금액 조정은 계약금액 조정심사 결과에 따라 변경계약코자 함.

- 설계변경내역

구분	전체분		4차분
	감리기간	도급비	감리기간	도급비
당초	’11.10.21 ~ ‘14.04.13	847,884천원	’14.03.11 ~ ‘14.04.13	58,084천원
변경	’11.10.21 ~ ‘14.06.30 (증 2.57개월)	942,900천원 (증 95,016천원)	’14.03.11 ~ ‘14.06.30 (증 2.57개월)	153,100천원 (증 95,016천원)

- 연기사유 귀책소재 : 우리본부

- 지체상금 부과여부 : 미 부과

첨부 : 1. 감리원 투입 계획 변경요청(감리단) 1부.

2. 감리원 투입 계획표 및 변경내역서 (전체분,4차분) 각1부. 끝.