투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국철도시설공단이사장(용지-시설처장)
(경유)
제목	수탁공사비 추가납부 및 선로보수용원 조정 재협의건 회시

1. 한국철도시설공단 용지.시설처-3586호(2014.03.26), -3887호(2014.4.02)와 관련입니다.

2. 노량진 환승통로 설치공사는 ‘08.12.17일 귀 공단과 우리시간에 체결한 위·수탁 협약에 따라 우리시에서 귀공단에 위탁하여 시행중에 있으며,

3. 사업비는 위·수탁 협약서 제5조(사업비의 산정 및 부담)에 의거 14,189백만원을 토목, 폐기물 및 전면책임감리, 기타 부대비용으로 납부 하였고, 물가변동 및 지장물 이설비용으로 20억원을 추가로 납부(‘09.10.01) 하였는데도 귀 공단에서는 추가 예산을 요구하고 있습니다.

4. 본 사업은 지하철9호선 1단계 910공구 노량진 정거장과 국철 노량진역간 환승하는 공사로 ‘09년 12월 9호선 1단계 사업이 종료되어 현실적으로 예산 확보가 곤란한 실정이며,

5. 또한 한국철도공사 요구사항 및 재설계 과정에서 귀 공단과 우리본부, 설계사 및 시공사(계약상대자)간에 수차례에 걸쳐 합동회의 및 설계검토를 완료한후 계약금액 조정(물가변동 및 물량조정, 공법변경)을 한 사항으로 우리시에서 납부한 사업비 범위내에서 공사가 마무리 될 수 있도록 협조하여 주시기  바랍니다.

6. 그리고 한국철도공사에서 요구하고 있는 선로 보수원 조정건은 우리시에서 판단하기에는 TRcM 겔러리관 압입 및 굴착 완료되어 지반이 안정화 되었다고 판단되고, 공사구간에서 상시 열차를 운행하고 있는 한국 철도공사에서도 기본적인 유지관리가 필요함을 감안하여 귀 공단에서 최소 인원만 근무 할 수 있도록 한국철도공사와 적극 협의하여 주시기 바라며,

7. 노량진 환승통로 설치공사와 관련하여 공사관련 및 책임감리용역 설계변경 자료를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사관련

1) 계약금액 조정관련 서류(총체 1,4,5,6회 계약금액 변경된 자료)

2) 각 건별 설계변경 보고서

3) 변경 설계 내역서

나. 책임감리용역

1) 야간 감리원 추가투입 보고서.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황왕연		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	04/14 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-4180	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개