상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(교통소통대책 용역)

우리사업소에서 시행중인 휘경동 34-1~43-10호 송배수관정비공사 외 2건 교통소통대책 처리용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 휘경동 34-1~43-10호 송배수관정비공사 외 2건 교통소통대책 용역

나. 계 약 자 : *****************

다. 계약금액 : ***********

라. 준공기한

- 당    초 : 2017.3.20. ~ 2017.5.28.

- 변    경 : 2017.3.20. ~ 2017.6.23.

마. 귀책사유 : 동부수도사업소(지체상금 미부과)

붙 임 1. 준공기한 연기 보고(서) 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박상열		시설관리팀장	代박상열		시설관리과장	05/26 최명익
협조자
시행	시설관리과-13921	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	0231462811	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(6)