문서번호	설비부-8799
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	전결 05/26 권오식
협조

준공기한 연기검토 보고

『동부간선도로확장(3공구) 전기(6차)』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05.

준공기한 연기검토 보고

『동부간선도로확장(3공구) 전기(6차)』

동부간선도로확장(3공구) 전기(6차)공사와 관련하여 선행 토목공사 공정 변경에 따라 준공기한을 아래와 같이 연기코자 보고 드림.

1		관련근거

□ 전기공사(6차) 공사기간연장 요청 : 동엔(발) 제2017-1210호(2017. 05. 25)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구)전기공사

□ 공사위치 : 상계주공16단지~의정부시계간 2.25km내 지하차도 2개소

□ 공사기간

- 총 차 : 2008.06.26. ~ 2017. 12. 31.

- 6차수 : 2016. 01. 20. ~ 2017. 05. 31(6차)

□ 도 급 비 : 금511,467,000원

□ 시 공 사 : ㈜정등전력 대표 김 병 갑

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

3		공사연기내용

□ 연기사유

∙ 선행공정(토목분야)의 도로교통차단 협의 지연으로 후속공정인 전기공사의 절대 공기부족

∙ 지체상금부과여부 : 미부과

∙ 귀책소재 : 도시기반시설본부

∙ 총 공사비(총차)

단위 : 원

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
전기 총차	총공사비	2,605,980,000	2,605,980,000	-
	도 급 비	1,672,109,000	1,672,109,000	-
	관 급 비	824,174,000	824,174,000	-
	이 전 비	109,695,000	109,695,000	-

∙ 전기 6차

단위 : 원

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
전기 6차 (2회)	총공사비	878,097,830	878,097,830	-
	도 급 비	511,467,000	511,467,000	-
	관 급 비	310,569,150	310,569,150	-
	이 전 비	56,061,680	56,061,680	-
공사기간		2016.01.22. ~ 2017.05.31	2016.01.22. ~ 2017.06.30	연장 30일

□ 감리단 검토의견

선행공정인 토목공사의 도로교통차단(간선도로 성수방향) 협의 지연으로 후속공정인 전기공사의 전력인입(장암지하차도)작업등이 연기되어 공사기간 절대부족.

4		조치계획

□ 건설사업관리기술단의 공사 준공기한 연기검토 보고가 타당한 것으로 사료되어 공사 준공기한을 연기 조치하고자 함

붙임 : 전기공사(6차) 공사기간 연기요청 1부.  끝.