문서번호	기반시설과-2178
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
조운행		박일연	05/26 박상돈
협조

서부이촌동 보행육교 설치공사 건설사업관리용역

- 설계 변경(기간 및 기술자 변경투입) -

2017.  05.

한강사업본부 기반시설과

서부이촌동 보행육교 설치 건설사업관리용역

- 설계변경(기간 및 기술자 변경투입) -

「서부이촌동 보행육교 설치공사」의 건설사업관리책임자로부터  현장여건에 따른 설계변경 요청에 대한 검토 보고 드림

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 서부이촌동 보행육교 설치공사 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : '16. 8. 25 ~ '17. 7. 20

❍ 과업대상 : 보행육교 B=4m, L=50.4m, 승강기(15인) 2대

❍ 용역금액 : 264,000천원

******************************

보 고 내 용

▢ 관련근거 : 서부감리 제2017-61호************

“서부이촌동 보행육교 건설사업 관리용역 건”

동성감리 제2017-096호************

“토목분야 분야별기술자 추가 투입 승인요청”

▢ 변경(안) : 계약금액 및 기간 변경(감)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
용역기간	‘16.8.25.~ ’17.7.20	‘16.8.25.~ ’17.6.9	감) 29일
계약금액	264,000천원	249,000천원	감) 15,000천원

▢ 변경사유

❍ 현재 건설공사 준공(5.20)으로 감리의 용역기간 조정(축소)

- 건설공사의 준공검사 시설물 인수인계, 준공도서 이관 등 기간 반영

- 용역준공일 : 당초 ~‘17.7.20 까지 ⇒  ~6.9까지 (41일 감)

❍ 준공검사 절차 및 시설물 인수인계를 위한 보조기술자 변경연장 투입(조병철→김영천, 조병철 타 현장 투입)

- 보조(토목/초급) : 당초 - ‘16.8.25 ~ ‘17.5.20

변경 - ‘16.8.25 ~ ‘17.6.9 (19일 증)

구 분	2016년								2017년												비 고
	8		9	10		11		12	1	2		3		4	5		6		7
책임기술자(고급)																					기간축소
분야별(기계/중급)																					변동없음
분야별(토목/초급)																					연장투입 (19일)

검 토 의 견

❍ 건설사업관리 용역의 기간조정 및 토목초급기술자 변경연장 투입하여 시설물인수인계 등 용역수행에 만전을 가하고자 함.

- 건설공사의 준공검사 시설물 인수인계, 준공도서 이관 등 기간 반영

- 용역준공일 : ‘17.07.20  →  ’17.06.09 (41일 감)

❍ 용역 설계변경에 따른 재계약 시행(총무과)

붙임 : 관련공문 2부.  끝.