문서번호	건축부-14044
결재일자	2017.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
김찬유	박범규	08/14 김진용
협 조

「마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사」

임시사용승인 추진계획 검토보고

2017.  8.

도시기반시설본부

(건  축  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사」

임시사용승인 추진계획 검토보고

「마포 성유비축기지 재생 및 공원조성공사」관련 문화비축기지 시민투어(‘17.8.16) 및 카페테리아 영업허가, 운영팀 입주등 고려한 임시사용승인 추진계획을 보고 드림

관련문서

공원녹지정책과-13755(2017. 8. 4.)호

건축부-13577(2017. 8. 7.)호

마포감 제2017-662호(2017. 8.14)호와 관련임

사업개요

공 사 명  : 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사

위    치 : 마포구 성산동 산 53-1번지 일대

규    모 : 지하3층/지상2층, 연면적 7,256.31㎡(텡크6개소, 지원시설 등)

공사기간 : ‘15. 12. 30. ～ ’17. 08. 30.

공사금액 : 21,000,000,000원

시 공 사  : ㈜텍시빌

감 리 자  : (주)무영씨엠건축사사무소 외 1

추진경위

`15. 12. 30. : 공사착수

`17. 08. 04. : 문화비축기지 임시사용 승인 요청(공원녹지정책과)

`17. 08. 07. : 문화비축기지 임시사용 승인 제출 요청

(건축부 → 건설사업관리단)

`17. 08. 14. : 임시사용승인 요청(건설사업관리단 → 건축부)

임시사용승인 개요

임시사용승인 건축물:  전체 시설물(탱크#1~6동, 지원시설. 안내동,

리모델링A,B동 등)

기    간 : ‘17. 8. 16. ~ 11 .15 (3개월)

사    유

- 문화비축기지운영TF팀 현장입주하여 사용

- ‘17. 8.16일부터 문화비축기지 시민투어

- 카페테리어 영업허가 절차 이행 등

관계법령검토

건축법 제29조 『공용건축물에 대한 특례』

소방필증, 승강기검사합격증명서, 전기사용필증 등 완료(별첨)

행정사항

공사완료 후 준공시 공용건축물 승인통보(마포구청)

임시사용승인 사항 관련기관(부서) 통보(마포구청 건축과·위생과, 공원조성과,

공원녹지정책과, 설비부)

향후계획

`17. 08. 16 : 임시사용승인통보(마포구청, 공원조성과등)

`17. 08. 30 : 준공

붙임 : 1. 임시사용승인 요청 공문(임시사용승인신청서포함 : 건설사업관리단) 1부.

2. 문화비축기지 임시사용승인 요청(공원녹지정책과) 1부. 끝.