문서번호	설비부-4052
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
장석춘		권오식	04/16 박기형
협 조

『강남순환도시고속도로(민자구간) 5~7공구』

상주감리원(기계) 투입 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환도시고속도로(민자구간) 5~7공구』

상주감리원(기계) 투입 변경 검토 보고

강남순환도시고속도로(민자구간) 건설공사 5~7공구의 기계분야 상주감리원 투입 계획을 다음과 같이 변경하여 감리업무에 차질이 없도록 하고자 함.

□  근  거

□ 『상주기계감리원 투입 변경 승인 요청』(주)선진엔지니어링

PSC-2014-250, ’14. 4. 8

□  감리용역 개요

- 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(민자구간) 건설공사 전면책임감리용역

- 규    모 : 왕복 6차로, L=12.4㎞ (터널 3개소, IC 2개소)

- 감 리 비 : 14,770백만원

- 감리기간 : ’07. 6. 1 ~ ’16. 7. 31(110개월)

- 감 리 사 : 선진엔지니어링종합건축사사무소, 도화종합기술공사 외 4개사

- 용역사별 지분율

구 분	선진ENG	도화ENG	신우디엔시	한신소방	건원ENG	수연ENG
지분율(%)	54.8	40.4	2.4	0.5	0.3	1.6

□  감리현황

□ 공동도급 감리용역사간 공구 분담 변경(토목부-18214호, ’13. 9. 30)

공 구 별	당 초	변 경	비 고
5공구	㈜선진엔니니어링	㈜선진엔니니어링
6공구	㈜도화엔니니어링	㈜도화엔니니어링
7-1공구	㈜선진엔니니어링	㈜도화엔니니어링
7-2공구	㈜선진엔니니어링	㈜선진엔니니어링

□ 기계분야 상주감리원 현황

공구별	업체	등 급	투 입 개월수	기사용	감 리 잔여월	비 고
5공구	선진ENG	감리사	17	-	17
6공구	도화ENG	감리사보	29	3	26	’14. 4. 1. 투입
7-1공구	도화ENG	감리사	9	-	9
7-2공구	선진ENG		12	4.95	7.05

□  변경내용

□ 기계상주감리원을 7-1공구는 6공구와 7-2공구는 5공구와 통합 배치

- 7공구는 공동도급 감리용역사간 공구 분담 변경(토목부-18214호,

’13. 9. 30)으로 감리업체가 7-1, 7-2공구로 분할되어

- 7-1공구는 6공구 감리사인 도화엔지니어링에서 7-2공구는 5공구 감리사인         선진엔지니어링에서 감리업무 수행함에 따라 7공구 기계상주감리원을          7-1공구와 7-2공구로 분리하고 5, 6공구와 통합하여 운영하고자 함.

- 통합 운영시 기계상주감리원 현황

공구별	용 역 사	감리등급	설계반영 투입월수	기사용	잔여월수	비 고
5공구 7-2공구	선진ENG	감리사	29	4.95	24.05
6공구 7-1공구	도화ENG	감리사보	38	3	35

□ 통합 배치에 따른 기계상주감리원 투입월수 감소 : 7-1공구 9개월

공구별	용 역 사	감리등급	잔여월수	투 입 예정월수 (공사기간 : 16.5월까지)	절감월수	비 고
5공구 7-2공구	선진ENG	감리사	24.05	24.05	-
6공구 7-1공구	도화ENG	감리사보	35	26	9 (감리사)

□  변경효과

□ 기계분야 감리업무의 연속성 확보 가능

- 5공구(17개월)와 7공구(21개월)는 기계분야 상주감리원의 투입월수

부족으로 단속(斷續)적인 투입이 불가피하나, 5, 6공구와 통합운영

시에는 연속투입이 가능하여 감리업무의 연속성 확보 가능

□ 기계분야 감리용역비 절감

- 통합운영시에는 감리사 9개월 투입분에 대한 용역비 절감

□  행정사항

□ 본 변경계획을 감리 총괄부서인 토목부에 통보하여 변경 시행

□ 5, 6공구 통합운영시 7공구 기계분야 감리업무가 소홀하게 이행되지       않도록 총괄감리단(5공구)에 지시

붙임 : 상주기계감이원 투입 변경 승인 요청(감리단 공문) 1부. 끝.