투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(3차, 정산) 시행(서울대공원 공영 주차장 시설개선공사)

현재 진행중인『서울대공원 공영주차장 시설개선공사』에 대한 설계변경(3차, 정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 설계변경(3차, 정산)

가. 공 사 명 : 서울대공원 공영주차장 시설개선공사

나. 사 업 비 : 금275,481,010원

(도급비 : 152,548,000원, 관급비 122,933,010원)

다. 공사기간 : 2017. 04. 19. ~ 2017. 08. 30.

라. 계약업체 : 스타건설(주) 대 표 박 나 현

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
총 공 사 비	275,481,010	273,193,410	감)2,287,600
도 급 비	152,548,000	150,271,000	감)2,277,000
관 급 비	122,933,010	122,922,410	감)10,600

바. 사    유

- 안전관리비 및 보험료 정산에 따른 변경

- 관급자재 수수료 정산에 따른 변경

사. 예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비, 주차장 바닥균열보수

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

주무관	손영민		총무과장	이행용		시설과장	08/22 오임석
협조자	주무관	한상길		주무관	정한성
시행	시설과-5143	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(6)