다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (19주)

2013 행정포털 개선사업의 19주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 4. 14. ~ 4. 18.  (19 / 26주차)

○ 추 진 율 : 70% (계획 71%)

- 지연사유 : 퍼블리싱 작업 일부 지연

○ 추진실적

- 사업관리 : 70% (계획 70%)

· 감리 시정조치계획 수립 및 결과 보완 (산출물 보완)

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템 개발 : 69% (계획 71%)

· 스토리보드 작성(통합검색, 관리자)

· 전체 퍼블리싱 85% 진행

· UX전환 : 메인(60%) / 게시판(70%) / 개인화(95%) / 검색(40%)

· 메인화면 개인화 : 마이포털(90%) / 포틀릿개발(60%) / 동적카운트(80%) / 레이어팝업(60%)

· 게시판 : 부서업무공지 등록기능(90%) / 게시판 개인화(완료) / 종합검색(50%) / 관리자(완료) / 권한관리(80%)

· 통합검색 : 수집웹사이트 룰 등록 및 수집진행, 권한 및 카테고리 SQL개발 진행, OPEN-API 코드 개발

- 시험 및 운영 안정화 : 15% (계획 15%)

· 테스트계획/시나리오 수정 보완, 단위테스트 체크리스트 작성, 시스템전환 계획 협의

붙임:  주간업무보고서(19주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/16 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-4964	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개