문서번호	급수운영과-19901
결재일자	2017.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
김두수	이승영	08/23 代김찬모
협 조

준공기한 연기검토 보고 (2017년 서대문구, 마포구 관내 아리수 음수대 설치공사(설비))
『2017년 서대문구, 마포구 관내 아리수 음수대 설치공사(설비)』 준공기한 연기 검토보고
ㅣ

2017.08.

급수운영과

『2017년 서대문구, 마포구 관내 아리수 음수대 설치공사(설비)』

준공기한 연기검토 보고

우리사업소에서 공사 시행중인 “2017년 서대문구, 마포구 관내 아리수 음수대 설치공사(설비)”와 관련하여 준공기한 연기원이 접수되어 검토결과를 보고드림.

【관련근거 : 준공기한 연기원 제출(2017.08.23.)】

□ 공사 개요

가. 공 사 명 : 2017년 서대문구, 마포구 관내 아리수 음수대 설치공사(설비)

나. 공사기간 : 2017.5.30. ~ 2017.08.27.

다. 공사내용 : D=15~20mm, L=300m

라. 도 급 비 : 14,030,660원

마. 시 공 사 : ㈜ 도원디에스 대**이정우

□ 추진 현황

가. 현재 공정 : 97% (2017.08.23.현재)

나. 완료 사항 : 가재울초등학교 등 14개소 급수관 배관 D=15~20mm, L=290m

다. 잔여 사항 : 공덕초등학교 등 7개소 음수대 추가 설치에 따른 급수관 배관 등

라. 추진 계획

1) 2017.8.27. ~ 2017.0 9.11. : 공덕초등학교 등 7개소 음수대 급수관 배관 등

□ 준공기한 연기 검토 결과

가. 준공기한 연기 사유 : 발주처 음수대 추가 설치 요청에 따른 절대공기 부족

나. 연장기간 산출 : 15일(기간 1개소 당 2일 연장, 마지막 일요일로 1일 추가)

다.  준공기한 연기 요청 일수

- 당초 : 2017.5.30. ~ 2017.08.27.

- 변경 : 2017.5.30. ~ 2017.09.11.(증 15일)

라. 검토의견 : 음수대 추가 설치에 따른 절대공기 부족은 발주청 요청사항

이므로 지체상환금 부과 없이 준공기한 연기함이 타당하다고 사료됨.

□ 조치계획

가. 준공기한 연기 사유가 타당하므로 행정지원과에 준공기한 변경 계약 요청하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 준공기한 연기원(예정공정표 포함)

2. 음수대 추가설치 관련 공문 5부. 끝.