함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북 고도정수처리시설 연결공사 추진일정 통보 및 급수운영 협조 요청

1. 배수과-2495호(2014.4.15.)와 관련입니다.

2. 강북정수장 고도정수처리시설과 기존 정수시설 연결공사와 관련하여 사전 시뮬레이션 및 연결공사 일정 【붙임 1) 참조】을 아래와 같이 알려드리고, 금일 오전 【4. 16(수) 09:00 현재】 까지의 사전 시뮬레이션(강북계통 관련 배수지 급수운영) 결과를 분석하고 보완조치 사항을 붙임 2) 로 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 추진일정 현황

- 사전 시뮬레이션 : 4. 7(월) ~ 4. 18(금)

① 강북정수장 수계 배수지(6개소) 최대수위 확보 : 4. 17(목) 14:00까지

② 강북정수장 1계열(50만톤/일) 생산중단 : 4.17(목) 14:00 ~ 18(금) 10:00

- 연결공사(예정) : 4. 22(화) 14:00 ~ 4.23(수) 10:00(시뮬레이션 결과에 따라 변경)

3. 또한, 본부 관련부서 및 수도사업소, 정수센터에서는 추진일정 등 관련사항을 숙지하시어 4.17 ~ 4.18 사전 시뮬레이션 및 4.22 ~ 4.23 실제 연결공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련 정수장 및 배수지 급수운영을 철저히 관리하여 줄 것을 재강조 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 강북정수장 사전 시뮬레이션 및 연결공사 추진일정표 1부

2. 사전 시뮬레이션(수계전환) 결과 【2014. 4. 16 10:00 까지】 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,시설과장,고도정수반장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	박기범		급수부장	04/16 이상홍
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-2526	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개