문서번호	조경과-4754
결재일자	2017.8.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	조경과장		관리부장
박융	강인호		전결 08/25 박진순
협 조

- 2017 서울대공원 소규모생물서식공간조성공사 -

공사기한 연기 검토 보고

2017. 8.25(금)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 2017 서울대공원 소규모생물서식공간조성공사-

준공기한 연기 검토 보고

서울대공원 소규모생물서식공간조성공사에 대한 공사기한 연기요청이 있어 다음과 같이 검토보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2017 서울대공원 소규모생물서식공간조성공사

○ 공사기간 : 2017.7.10.~9.7

○ 도 급 액 : 금69,027,800원

○ 도 급 자 : 우영환경개발(주) 주상현

○ 공사내용 : 생태연못, 관찰데크, 초화류•관목류 식재,  배수로정비, 울타리정비 등

2		문 제 점

○ 공사기간중 폭염과 우천으로 인한 공사지연이 발생하여 절대공기 부족

3		조치계획

○ 위와 같은 사유로 공사기간 연기가 불가피하므로 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후
공사기간	2017.7.10.~9.7	2017.7.10.~9.21	14일 연기

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 공사기한 연기요청 공문 1부. 끝.