문서번호	급수운영과-8183
결재일자	2014.4.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		김기상	04/16 장시명
협조

급수공사 연기 보고(신설-348,356번)

2014. 04.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 관내 신림동 지역담당업무 수행중 신축건물 급수공사 시행과 관련하여 아래와 같은 사항이 있어 보고 합니다.

2014. 04.

보고자  직 : 지방시설서기  손 현 정

남부수도사업소장 귀하

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 현장내용

○ 작업지시번호 :  신설 – 348,356번

○ 위       치 :  관악구 ########################

○ 계 약 업 체 : 계산이엔씨(주) 대표 계대영

□ 보고내용

○ 상기 작업지시에 의하여 ###########외 1개소 신축건물에 대한 급수공사 작업지시를 하였으나, 건축공정이 지연되고 건축공사장내 자재적치등 공사여건상 급수공사 시행이 지연되어 준공기한내 급수공사가 어려운 실정으로 수요가로부터 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 준공기한을 연기하여야 할 실정임.

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 처리의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 준공기한을 연기하여 신축건물 급수공사 업무에 최선을 다하고, 급수불편 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

- 당초 작업기간 ┍ 신설-348번 = 2014.04.04. ~ 2014.04.17.

┕ 신설-356번 = 2014.04.05. ~ 2014.04.23.

- 변경 작업기간 ┍ 신설-348번 = 2014.04.04. ~ 2014.04.17.

┕ 신설-356번 = 2014.04.05. ~ 2014.04.23.

끝.