문서번호	방재시설부-1722
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	04/16 박종웅
협조

건설공사 설계변경 보고(2차1회,3차1회)

(합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사)

2014. 4

도시기반시설본부

(방재시설부)

건설공사 설계변경 보고(2차1회,3차1회)

(합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사)

합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사의 중동빗물펌프장이 2014년 완료됨에 따라 차수간 내역 조정을 위한 설계변경을 실시코자 보고 드림.

(2차 1,812,100천원→969,700천원 감842,400천원 , 3차 437,800천원→1,280,200천원 증842,400천원)

※ 관련근거 : 공사관리1처-2731호(2014.4.15)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장증설공사

○ 위    치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산동 99-5 일원

○ 사업개요 : 집수정 설치 2개소(증설집수정용량 1,028㎥, 1,650)

펌프토출용량증설 370㎥/분(160㎥/분, 210㎥/분) 등

○ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3

○ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

○ 공 사 비 : 4,740,587천원(2차 : 1,812,100천원, 3차 : 437,800천원)

□ 설계변경 내용

1. 2014년 중동빗물펌프장 공사완료에 따른 2차, 3차 내역 조정

- 총차내역 변경없이 2차공사는 중동빗물펌프장, 3차공사는 합정빗물펌프장 내역         으로 구성

2. 계약금액 변경 내용

가. 총차 : 변경사항 없음

- 도 급 비 : 4,740,587,000원(변경없음)

- 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3(변경없음)

나. 2차1회

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	1,812,100,000	969,700,000	감 842,400,000
공사기간	2013.12.27 ~ 2014.8.31	2013.12.27 ~ 2014.8.31	변경없음

다. 3차1회

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	437,800,000	1,280,200,000	증 842,400,000
공사기간	2014.4.1 ~ 2014.8.30	2014.4.1 ~ 2014.8.30	변경없음

□ 조치의견

○ 공단에서 제출한 “설계변경(2차분 1회, 3차분 1회)검토 보고” 내용을 검토한 바, 2014년 중동빗물펌프장 완료에 대비한 차수간 내역변경으로 공단 의견과 같이  2차, 3차공사에 대한 내역을 변경 계약하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임   1. 공단보고서 1부.

2. 설계변경내역서(2차1회)

3. 설계변경내역서(3차1회)   끝.