투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	서울숲,응봉공원 테마놀이터 재조성공사 관급자재 변경계약 요청

1. 서울숲공원관리사무소-92342(2013.9.24)호와 관련입니다.

2. 서울숲,응봉공원 테마놀이터 재조성공사의 설계변경으로 인해 관급자재 (포설형탄성포장재)구매 물량을 아래와 같이 변경코자 합니다.

가. 건    명 : 서울숲,응봉공원 테마놀이터 재조성공사 관급자재 구매

나. 계약금액 : 금45,427,590원(금사천오백사십이만칠천오백구십원)

(자재대 : 45,183,600원, 조달수수료 : 243,990원)

다. 납품기한 : 2014.04.30

라. 계약상대자 : ############

마. 변경내용

1) 변경사유 : 현장여건에 따른 설계변경으로 물량감소

2) 변경물량 : (변경 전) 358.6㎡ → (변경 후) 344.23㎡ (14.37㎡ 감소)

3) 변경금액 : (변경 전) 45,427,590원 → (변경 후) 43,607,190원 (1,820,400원)

물품 식별번호	품 명	규 격	단위	단가(원)	당 초		변 경		비고
					수량	금액(원)	수량	금액(원)
22547465	포설형탄성포장재	T65mm	㎡	126,000	358.6	45,183,600	344.23	43,372,980	-
	조달수수료	0.54%				243,990		234,210	-
	합 계					45,427,590		43,607,190	-

바. 예산과목 : 푸른도시국공원조성과,생활권공원확충,시민고객이감동하는고품격공원관리,동네커뮤니티공원조성,노후공원재조성,시유공원내테마놀이터재조성,시설비 (2013.사고이월예산)

끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	김윤수		시설팀장	송복식		서울숲공원관리사무소장	04/16 권오국
협조자	주무관	지정희		운영팀장	최원아
시행	서울숲공원관리사무소-3366	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울시 뚝섬로 273(성수1가1동685번지)	/
전화	(02)460-2918	/전송	(02)460-2930	/		/	부분공개