회 의 결 과 보 고 서

주무관		계량기관리팀장	소장		결재
조중엽		조현외	04/17 성시영
협 조

	디지털(고품질) 계량기 자동검침 시범사업과 관련하여 본부 계측관리과, 서부수도사업소 및 검침단말기 제조업체와 합동 회의를 개최하고 그결과를 보고합니다.
2014.04.16
보 고 자 : 공업8급 성명 : 조중엽

보 고 내 용
일 시	2014.04.16. 14:00
건 명	디지털(고품질) 계량기 자동검침 시범사업 관련 회의
내용	□ 장 소 : 서교동 검침단말기 설치장소 □ 참석자 : 상수도본부 계측관리과, 수도자재관리센터 계량기팀장 및 담당, 서부수도사업소 현장민원과, 검침단말기 설치업체 □ 회의 안건 - 디지털계량기의 자동검침 시범사업 진행현황 및 문제점 해결방안 모색 □ 진행현황 - 대형디지털계량기는 8개소 중 계량기와 검침중계기의 통신에 사용되는 컨버터를 개발하였으며 설치예정 - 소형디지털계량기는 2,108개소 설치(2,149개소중 98.09%) - 단말기는 2,013개소 설치(2,157개소중 93.32%) □ 문제점 - 검침단말기 설치를 거부하는 수용가가 있으며 재건축수용가(3개소) 및 공가 등 설치가 어려운곳 다수

	□ 회의결과 - 서부수도사업소 현장민원과에서는 2014.04.22.까지 계량기설치를 마무리 할 예정이며 검침단말기설치업체에서는 2014.04.25.까지 재건축(3개소)를 제외하고 모두 설치 예정임을 확인 - 수도자재관리센터에서는 대형계량기에 검침단말기가 조속히 설치되도록 외부표시기 열쇠를 제공 예정이며 검침단말기 설치를 거부하는 수용가에 현장출장하여 협조 독려 예정 □ 기타 민원방문 - 검침단말기 설치를 거부하는 수용가 11개소에 직접 방문하여 무선검침사업의 당위성을 설명하고 협조요청하였으나, 수용가의 완강한 반대로 설치가 어려우나 지속적으로 협조독려 방문 예정(서교동 453-1 주변연립)
비 고