문서번호	시설보수과-3220
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	08/31 이종엽
협 조

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[면목천복개구조물 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

성동도로사업소

(시설보수과)

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[면목천복개구조물 보수공사]

‘면목천복개구조물 보수공사’를 수행함에 있어 현장조사 결과 포장면적 변경에 대한 감독기관의 검토보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 면목천복개구조물 보수공사

공사기간 : 2017. 5. 30. ~ 2017. 11. 25.

도 급 비 : 1,076,891,370원

도 급 자 : 광혁건설(주)  대표 신현각

공사개요 : 교면방수 12,149㎡, 아스팔트포장 121.4a, 상판보수 300㎡

Ⅱ		현황 및 문제점

설계 물량과 현장조사 물량 상이

- 아스팔트 절삭 후 포장 : 12,149.5㎡ ⇒ 13,053.8㎡(증 904.3㎡)

* 포장면적 변경에 따른 바탕처리 및 방수 등 물량 변경

당초 설계 물량 중 시공구간 확인

- 겸재로 구간 포장(도로보수과 시공) : 496㎡(감)

Ⅲ		감독기관 검토의견

현장조사 결과와 같이 시행하고 추후 설계변경 반영

개략공사비 : 약 41,654천원 증

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 감독기관의 검토보고 사항에 대하여 검토한 바, 현장 실측에 따른 실 수량 반영과 기 포장구간 제외함이 타당 하므로 시행토록 조치하고자 하며,

다만, 공사비 증액은 금년도에 기확보한 예산범위 내에서 집행이 가능한 바, 예산 현황 및 증·감사항 등에 대하여 종합적으로 검토 후 설계변경 시행토록 조치하고자 함.

붙임  감독기관 검토보고 및 관련 공문 1부. 끝.