문서번호	교량안전과-15826
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장		안전총괄관
백운경	유제천	한유석		08/31 이진용
협 조

『2017년 한강교량 일상유지보수공사』

하반기 추진계획 보고

2017. 8.

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2017년 한강교량 일상유지보수공사 -

하반기 추진 계획 보고

한강상 교량의 안전확보 및 일상유지관리를 위해 『한강교량 일상유지보수공사』 시행 중 시설물 순찰 및 집중점검 등 각종 점검결과 적출사항 등 당초 유지보수공사 물량보다 추가로 소요 물량 증가가 예상됨에 따라 이에 대한 조치계획 보고 임.

사업개요

한강교량 일상유지보수공사-1공구

- 위    치 : 한강상 교량 11개소(암사대교~반포대교)

- 공사기간 : 2017. 01. 13 ~ 2017. 12. 31

- 도 급 액 : 2,672,035천원

- 수 급 자 : ㈜풍산씨앤씨 대표 하종수

한강교량  일상유지보수공사-2공구

- 위    치 : 한강상 교량 9개소(동작대교~행주대교)

- 공사기간 : 2017. 01. 09 ~ 2017. 12. 31

- 도 급 액 : 2,661,671천원

- 수 급 자 : ㈜선진기술공사 대표 문영찬 외 1

2017년 예산 현황

한강교량일상유지보수 예산 : 7,900백만원

- 시설비 : 6,900백만원,

- 감리비 : 1,000백만원

※ 2017년 한강일상유지보수공사 시설비 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	발주금액	계약액	집 행 잔 액			비고
				계	유보액	낙찰차액
계	6,900,000	6,603,280	5,743,214	1,156,786	296,720	860,066
도급비	6,300,000	6,166,384	5,333,706	966,294	133,616	832,678
관급비	400,000	374,896	330,540	69,460	52,104	17,356
이전비	200,000	89,000	78,968	121,032	111,000	10,032

현 안 문 제

2017년 시설물 순찰 및 집중점검을 비롯한 각종 점검에 따른 보수공사 실시 등으로 금년도 본 계약액의 약 86% 정도가 작업완료 및 시행 중으로,

하반기 집중점검시 적출되는 긴급 보수사항에 대한 소요공사비 추가 확보가 필요한 실정이며, 공사물량 증가에 따른 관급자재 및 건설폐기물처리비 증가가 예상 됨.

※ 공사집행 현황 (2017.  08. 30. 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	도급액	작업지시			잔 액 (향후추진)	비고 (집행율)
		소 계	완 료	작 업 중
계	5,334	4,586	2,704	1,878	748	86.0%
한강교량 일상유지-1공구	2,672	2,321	1,081	1,240	351	86.9%
한강교량 일상유지-2공구	2,662	2,265	1,623	638	397	85.1%

조 치 계 획

한강상 교량 하반기 정기점검(집중점검) 시행 등에 따른 시설물 보수물량이 증가 될 것으로 예상되므로,

한강교량의 안전확보 및 2차 사고 예방과 긴급시설물 유지보수를 위해 한강교량일상유지보수공사 집행잔액(낙찰차액 및 유보액)을 활용하여 우선 보수․보강 공사를 시행하고 추후 정산하여 안전한 한강교량 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 2017년 한강일상유지보수공사(1,2공구) 집행현황 각 1부. 끝.