투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부수도사업소장
(경유)
제목	상수도관로 이설기간 조정 및 원인자 부담금(수도)고지서 재발급 요청

1. 동부수도사업소 급수운영과-4466호(2014.3.4.) 및 상수도사업본부  배수과-993호(2013.2.18.)와 관련입니다.

2.「사근빗물펌프장 증설공사」는 집중호우 대비 수방능력을 향상시켜   저지대 침수예방을 위한 사업으로 2014. 6월말 까지 완료예정에 있음을 알려 드립니다.

3. 최근 귀 본부(사업소)의 관로 이설공사 승인조건에 따라 제수변 이설 작업은 부단수 공법으로 조치하고 잔여공정인 제수변 주변 포장은 2014.5.30.까지 마무리 할   예정이므로 이설기간 조정 및 원인자부담금 청구서(금 10,276,340원)납부기한을 변경하여 재발급 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사근 빗물펌프장증설공사

나. 지장물 이설위치 : 청계천 상류측

다. 이설대상 :  상수도 제수밸브 (D=1,650mm) 1개소

라. 상수도 관로이설 기간 조정

- 당  초 : 2014.3.30

- 변 경 : 2014.5.30

붙임 : 공문서 사본 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	代오수양		방재시설부장	04/17 代박희천
협조자
시행	방재시설부-1818	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개