기성부분검사(감독)조서(용역)

문서번호	시설과-1071
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설과장		시설안전부장
		이용구		代이용구		04/18 윤석우

공 사 명	강북정수장 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역(7차분 1회)
계 약 자	(주)도화엔지니어링 노진명 외 2개사
계 약 금 액	일금729,672,000원(금칠억이천구백육십칠만이천원)
기 성 금 액	일금192,000,000원(금일억구천이백만원)
계 약 년 월 일	2013년 12월 31일					준 공 예 정 일			2014년 11월 30일
착 수 년 월 일	2014년 01월 02일					금회기성신청일			2014년 04월 10일
기 성 검 사 일	2014년 09월 09일					기성이행기간			2014.01.02 ~ 2014.03.31.
기 성 내 역	전회까지 기성금액		금 회 기성금액				금회까지 누계금액				금회지급후 남은 금액
			￦192,000,000원				￦192,000,000원				￦537,672,000원
비 고
위 용역에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는바 공사설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본조서를 제출함.
2014년 04 월 16 일
현장감독공무원		고도정수반			지방시설주사		직	성명		이용구
검 사 자		고도정수반			지방시설주사		직	성명		변병수			변병수
검 사 자		고조정수반			지방시설주사		직	성명		최이영			최이영
서울특별시상수도사업본부(분임)경리관 귀하

기성검사 내역(1)

용 역 명			강북정수장 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역(6차분 1회)
계 약 자			(주)도화엔지니어링 대표 노진명 외 2개사
계약금액			총용역비		일금3,922,110,000원(금삼십구억이천이백일십일만원
			금회(7차)		일금729,672,000원(금칠억이천구백육십칠만이천원)
기성금액	전회까지		-
	금회		￦192,000,000원 (금일억구천이백만원)
	누계		￦192,000,000원 (금일억구천이백만원)
계약년월일			2013년 12월 31일					준공기한		2014년 11월 30일
기성검사일			2014년 04월 11일							(금액단위 : 원)
공종		단위	계약금액			전회까지 기성금액			금회기성금액			누계
			수량	금액		수량	금액		수량		금액	수량	금액
1.직접인건비		식	1	341,327,774					1		89,724,096	1	89,724,096
2.제 경 비		식	1	267,259,647					1		70,253,967	1	70,253,967
3.기 술 료		식	1	30,397,673					1		7,936,094	1	7,936,094
4.직접경비		식	1	24,353,088					1		6,631,297	1	6,631,297
5.손해보험료		식	1
공급가액				663,338,182					1		174,545,454	1	174,545,454
6.부가가치세		식	1	66,333,818					1		17,454,546	1	17,454,546
도 급 액				729,672,000					1		192,000,000	1	192,000,000

기성검사 내역(2)

용 역 명			강북정수장 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역(6차분 1회)
계 약 자			(주)도화엔지니어링 대표 노진명 외 2개사
계약금액			총용역비			일금3,922,110,000원(금삼십구억이천이백일십일만원
			금회(7차)			일금729,672,000원(금칠억이천구백육십칠만이천원)
기성금액	전회까지		-
	금회		￦192,000,000원 (금일억구천이백만원)
	누계		￦192,000,000원 (금일억구천이백만원)
계약년월일			2013년 12월 31일							준공기한			2014년 11월 30일
기성검사일			2014년 04월 11일										(금액단위 : 원)
공 종		단위	구분	단가	계약금액			전회기성금액			기성금액			누계
					수량		금액	수량	금액		수량	금액		수량	금액
1.직접인건비		인월	상주	5,174,400	56.07		290,128,608				14.739	76,265,482		14.739	76,265,482
		인월	비상주	5,174,400	9.895		51,199,166				2.601	13,458,614		2.601	13,458,614
		소 계					341,327,774					89,724,096			89,724,096
2.제 경 비		식	직접인건비의78.3%		1		267,259,647				1	70,253,967		1	70,253,967
3.기 술 료		식	(직인+제경비)*5.0%		1		30,397,673				1	7,936,094		1	7,936,094
4.직접경비							24,353,088					6,631,297			6,631,297
①사 무 원		개월	보통	2,117,099	11.00		23,288,088				3.0	6,351,297		3.0	6,351,297
②도서인쇄비		식					1,065,000				1	280,000		1	280,000
③PMIS운용		식			1		0				1	0		1	0
5.손해보험료
공급가액							663,338,182					174,545,454			174,545,454
부가가치세		식	10%		1		66,333,818				1	17,454,546		1	17,454,546
도 급 액							729,672,000					192,000,000			192,000,000

붙임 : 기성내역서 1부.  끝.