문서번호	조경과-5358
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	조경시설팀장	조경과장
최경주	한정훈	04/18 이원영

공개공지 되살리기 대상지 변경요청에 대한 검토보고

푸른도시국

(조경과)

공개공지 되살리기 대상지 변경요청에 대한 검토보고

도봉구로부터 2013년 공개공지 되살리기 사업 대상지 변경요청에 따라 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 2013년 공개공지 되살리기 사업

○ 규    모 : 1,152㎡

○ 대 상 지 : 창동 농협유통센터 공개공지 및 가로정원 (창4동 1-10 외 2)

○ 사업내용 : 화단설치, 휴게시설 설치 등

○ 공사기간 : 2013. 12. 16 ~ 2014. 5. 15

○ 총사업비 : 45백만원(공개공지 15, 가로정원 30)

□ 대상지 변경요청 내역

○ 변경내역

자치구명	당 초			변 경			비 고
	위 치	규모 (m)	금 액 (백만원)	위 치	규모 (m)	금 액 (백만원)
도봉구	창동 농협유통센터 (창4동 1-10외 2)	1,152	45	도봉구청 (방학1동 720)	2,635	45

○ 변경사유

- 꽃의 정원 조성 대상지 여건이 식재기반 조성이 어렵고 농협측의 이용자 보행통로 개설로 사업효과가 떨어짐.

- 설계자(공공조경가 노선주) 현장자문(‘14.4.4) 시 대상지 변경의견

※ 가로정원 조성 구간은 기존대로 추진

[조성계획도]

하나로클럽 램프

설치예정 구간

가로정원 구간

공개공지 구간

하나로클럽 보행

통로 개설 구간

지하구조물 구간

□ 변경대상지 검토

○ 도봉구종합청사 공개광장으로 훼손된 녹지 정비 필요

- 공개공지 주변 수목 뿌리가 돌출되어 있는 등 훼손된 녹지 정비로 휴게공간 주변 환경개선 필요

□ 검토의견

○ 수목 및 초화류 식재로 공개공지를 이용하는 주민의 편익증진을 위하여 녹화가 요구되므로

○ 자치구 요청에 따라 사업 대상지를 변경 추진하여 사업 추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임 : 공개공지 계획도 및 현황사진 1부.  끝.