함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북 고도정수처리시설 1차 연결공사를 위한 급수운영 안내 및 협조요청

1. 배수과-2526호(2014.4.16.)와 관련입니다.

2. 강북정수장 고도정수처리시설과 기존 정수시설 연결공사를 위한 사전 시뮬레이션이 이상없이 완료되었음을 알려드리며, 이에 따라 아래와 같이 연결공사를 위한 급수운영을 추진하고자 하오니 서울시 관련부서(사업소, 정수센터 포함)와 강북정수장에서 수돗물을 공급받고 있는 시계외 급수지역(구리시, 남양주시)에서는 연결공사가 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 연결공사 추진

- 연결공사(예정) : 4. 22(화) 11:00 ~ 4.23(수) 07:00(20시간)

- 사전 시뮬레이션에서 시행한 대로 연결공사 추진

㉠ 연결공사 준비 : 4.22(화) 11:00 까지 관련배수지 최대수위 확보

㉡ 他 정수센터 공급지원 : 4.23(화) 연결공사 종료 후 수계 안정화까지 지속 공급

⇒ 구의(1만톤/일), 뚝도(2만톤/일), 암사(6만톤/일) 공사 종료시까지 Peak 타임제 전기요금에 상관없이 지속공급 시행

㉢ 시계외 급수지역(구리시, 남양주시)도 4.22(화) 11:00 이전까지 관련배수지 최대수위 확보토록 적극 협조 요청

나. 향후계획

- 연결공사 종료 후 4.24(목) ~ 4.25(금) 수계전환 환원조치를 시행하며, 수질에 이상이 없도록 최대한 서서히 밸브조절 등 급수운영 조치

- 1차 연결공사에 대한 문제점 보완조치 및 급수운영 검토를 위해 관계자회의를 개최하고 향후 일정(2, 3차 연결공사 등)을 협의 예정임.

다. 협조사항

- 연결공사에 대한 추진계획 및 조치사항을 관련 사업소 기전팀장(운영팀장) 및 제어실 운영 근무자가 철저히 숙지하고 근무 할 수 있도록 각 사업소에서는 교육 및 업무지시 철저

따로붙임 : 1. 강북정수장 고도정수처리시설 연결공사 추진일정표 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	구리시장(수도과장),남양주시장(수도과장),생산관리과장,기전설비과장,시설과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강남수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	전결 04/18 박기범
협조자	주무관	신근호
시행	배수과-2590	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개