문서번호	급수운영과-8668
결재일자	2014.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이동석		김광운	04/18 안재엽
협조

설계변경(2차)심의결과 보고

(2013년 응봉동외8개동 상수도공사(장기계속))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 18.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계 변경(2차) 심의결과 보고

(2013년 응봉동외8개동 상수도공사(장기계속))

『2013년 응봉동외 8개동 상수도 공사』에 대한 설계변경(2차) 심의를 완료하고 그 결과를 보고드림.

1				설계변경 개요

○ 공 사 명 : 2013년 응봉동외 8개동 상수도공사(장기계속)

○ 공사기간 : 2013. 7. 4 ~ 2014. 6.30.

○ 도 급 자 : ㈜ 정승 건설 대표 조인형

○ 설계변경 금액 내용

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
도 급 비	363,476,540	363,476,540	변경없음

2				심의 내용

○ 일 시 : 2014. 4.18(금)

○ 심의자 : 급수운영과장외 5명

○ 심의내용

- 물량증․감 발생에 따른 설계변경 타당성 검토

3				심의 결과

○ 설계변경 타당함.

4				조치의견

○ 심사결과 설계변경이 타당함으로 설계변경 시행하고 본청(재무과)에 변경계약의뢰 하고자함.

붙임 : 1. 설계변경 심의의견서 1 부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.