문서번호	시설과-1878
결재일자	2014.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
배시연	윤학수	한성현	04/19 신시섭
협 조

『난지천공원 테마놀이터 재조성공사』

실정 검토보고(2차)

2014. 4

서부공원녹지사업소

[시 설 과]

『난지천공원 테마놀이터 재조성공사』실정 검토보고(2차)

우리사업소에 시행중인『난지천 테마놀이터 재조성공사』의 탄성포장재(고무칩포장) 시공과 관련하여 실정보고합니다.

■ 공사개요

1. 공 사 명: 난지천공원 테마놀이터 재조성공사

2. 공사기간: 2013. 10. 17 ~ 2014. 4. 25

3. 공사개요

- 식  재  공: 느티나무, 잔디

- 시설물공: 조합놀이대 등 19종

- 포  장  공: 투수블록포장 등 6종

- 우배수공사: 집수정 등 4종

4. 도 급 비: 279,507천원

5. 도 급 자: 성림조경건설(주)  대표 유환천

■ 현장여건 실정보고

구 분	실정사항 검토의견	증감금액(천원)
유아놀이터 관급자재	▶ 고무칩 탄성보강을 위해 조합놀이대 하부만 규격(T70)을 변경하였으나 일정한 표면마감에 어려움이 있어 조합놀이대 하부도 당초(T50)대로 조정하고 일부 고무칩 탄성력 보강이 필요한 낙상사고 우려지점은 현장시공시 보강. - 고무칩포장(T50) 368.4㎡ → 537㎡ (증168.6㎡) - 고무칩포장(T70) 168.6㎡ → 0㎡ (감 168.6㎡)	감 1,983

■ 검토의견

❍ 놀이터 일정한 표면마감을 위해 시공한 대로 관급자재 물량을 조정하여

정산(변경계약)하고자 함. 끝.