문서번호	정수시설과-399
결재일자	2014.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	04/11 김동기
협조
	주무관		곽희영

LED 조명 교체사업 추진계획

2014. 4.

뚝도아리수정수센터

(보수과)

LED 조명 교체사업 추진계획

서울시 원전하나 줄이기 종합대책 및 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획에 따른 우리 센터 기존 조명등을 고효율 LED 조명으로 교체하여 에너지 절약 및 공공부문 LED조명 선도적 보급 확대에 기여하고자 함.

□ 관련근거

❍ 2013년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준 (서울특별시 공고 제2013-589호)

❍ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획 (기후환경본부 환경정책과-3872호, 2014.3.10)

- 당초 ′20년까지 공공부문 100% → ′18년까지 100% (정부 계획보다 2년 단축)

- 연도별 로드맵 : ′14년 30%, ′15년 40%, ′16년 60%, ′17년 80%, ′18년 100%

□ 정수장 조명등 현황

합계		실내등										실외등		비고
		관리본관		웰빙센터		송수실		배출수 처리장		기타(공동구,응집기실,배수정)		배출수처리장 보안등
999		509		178		118		70		114		10
기존	LED	기존	LED	기존	LED	기존	LED	기존	LED	기존	LED	기존	LED
699	300	336	173	118	60	94	24	29	41	114	-	8	2

- 정수장 현대화공사에 포함된 시설의 조명 제외

(2,3계열 여과지동 226등, 염소동 55등, 약품동 71등, 실외등 79등)

- LED 조명 개선에 의한 조도 상승으로 불필요한 조명(58등) 제외(램프 제거)

- 자양취수장 전면 리모델링 추진에 따라 취수장 조명 제외

(현재 상수도본부에서 설계용역 추진중)

▷ 현재까지 정수장 LED조명 교체비율 : 30.0%

▷ 금년도(2014) 교체사업(약 627등) 이후 LED조명 교체비율 : 약 92%

□ 추진계획

❍ 사업개요

- 사업규모 : 정수장 LED 조명 약 627등 교체

- 추진기간 : 2014. 2. ~ 6.

- 사 업 비 : 120백만원 (관급비 약 80백만원, 공사비 약 40백만원)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

❍ 추진방법

- LED 조명 구매 : 조달 구매(제3자단가계약)

- 조명교체 전기공사 : 전자공개수의계약

- LED 제품 선정 :『조달제품 선정 심사위원회』개최하여 선정

․ 개최일시 : 4.14(월) 확대간부회의 실시(09:00) 이후(예정)

❍ 교체계획

- 교체 장소 및 수량

합계	관리본관	웰빙센터	송수실	배출수 처리장	2계열 지하 응집기실, 공동구, 관랑실	비고
627	314	117	88	29	79

- 등기구 형식 및 규격 선정

․ 사무실 공간 : LED 평판형(일체형)(40W) ~ 광원 비노출로 눈부심 없음

․ 사무실 외 공간(복도,작업장,기기실,창고 등) : LED 직관형 램프(20W*2등 또는 1등)

~ 커버(확산판) 없어 더 밝고, 램프 탈착 가능하여 유지관리가 용이하며,

먼지 등으로 인한 색상변화가 없음

․ 지하 응집기실 : LED 투광등(60W)

․ 지하 공동구 : 방습형 등기구에 LED 직관형 램프(20W) 취부

․ 직관램프 취부를 위해 각 타입별 노후된 등기구도 같이 교체

- 등기구 및 램프 구매수량                               (단위 : 개)

구 분	규 격	수량	비고
LED 평판형(300*1200)	40W, 매입형	88	형광등 32W*2등 대체용
LED 평판형(600*600)	40W, 매입형	42	형광등 32W*2등 대체용
LED전용 매입형 등기구	직관램프 20W*2	142	형광등 32W*2등 대체용
직관형 LED 램프	20W	420	형광등 32W*2등 대체용
LED 투광등	60W	18	메탈 250W 대체용
LED 다운라이트	12W, 일체형	67	다운라이트 25W 대체용
LED 천정직부 (센서형) 등기구	11W, 원형	30	삼파장등 25W 대체용
등기구(공대)	방습형 등기구 외 5종	187	직관형 LED 램프 취부용
계		994

□ 추진일정

❍ ′14. 4. 14. : 조달제품 선정 심사위원회 개최

- 장소 및 시간 : 매주 월 09:00 확대간부회의 직후, 회의실(관리본관 1층)

- 위원장 : 소장

- 위  원 : 행정관리과장, 정수과장, 정수시설과장, 정수시설과 기계팀장 및 전기팀장

❍ ′14. 4. 14. : 제품선정 심사결과 보고

❍ ′14. 4. 15. : LED조명 조달구매 발주(제3자단가계약)

❍ ′14. 4. 21. : 조명교체 전기공사 발주(전자공개수의계약)

❍ ′14. 5. 15. ~ 6. 30. : LED조명 납품 및 현장 설치공사

❍ ′14. 6. 30. : 준공

붙임 : 1. 등기구 현황(LED조명 교체대상) 1부.

2. 『2013년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준』 대비 조달제품 성능 비교표 1부.  끝.