투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	공사중 도로점용기간 연장 요청(서남권 돔야구장 보행자전용도로 설치공사)

1. 교통운영과-4088(2013.03.07.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중에 있는『서남권 돔야구장 보행자전용도로 설치공사』에 대한 공사중 도로점용기간을 아래와 같이 연장 요청 합니다.

가. 점용기간

1) 당 초 : 2013.01.02. ~ 2014.03.31.

2) 변 경 : 2013.01.02. ~ 2015.02.28.

나. 사유 : 경찰청 교통규제심의 지연(승인일 2013.09.30.).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	04/21 노우성
협조자
시행	토목부-7544	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2578	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개