문서번호	시설과-1325
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
박진우		홍순철	04/21 변규열
협조

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사」 실정보고(8회보완)에 따른 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사」

실정보고(8회보완)에 따른 검토보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사(2차)

❍ 공사개요 : 옥외 보안등공사 1식,건축전기공사1식,

옥외 전기철거공사 1식

❍ 공사기간 : 2012. 12. 14 ~ 2014. 04. 30

❍ 도 급 액 : 95,060,000원

❍ 도 급 자 : 라온엘에스디(주) 대표 임순옥

실정보고 검토

❍ 실정보고 (8회보완) : 공사감독3처-3167(2014.04.18)

공 종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	개략금액 (순공사비, 천원)	비 고
1. 옥외보안 등 공사	▷설계에 공원등 등주내 배선(F-CV 4㎟*2C × (5m*2L))이 반영토록 하였으나 등기구 제작사에서 등주내 배선이 제작, 납품되어 별도 반영이 불필요한 실정임	▶설계에서 공원등 등주내 배선 제외	(감) 1,016

검토의견

❍ 공단에서 제출한 실정보고(8회 보완) 내용과 같이 공사 시행하도록 승인하고 추후 설계변경 처리하고자 함.

붙 임 : 실정보고 1부.  끝.