문서번호	안전치수과-16171		주무관			하수계획팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2017.9.22.		신현수			김서연			황왕연	09/22 이학구
공개여부	대시민공개
			협조

2017년 관내하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가)

제3회 설계변경 검토보고

관내 하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가) 감독업무 수행중 설계변경(3회) 사항이 발생하여 아래와 같이 검토·보고합니다.

2017.  9.   .

지방시설주사보 신 현 수

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 관내 하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 관내 전 지역

○ 규    모

• 하수관 부설 : D=250~1000㎜,  L=1,265m

• 맨홀설치(1~3호) : N=56개소

• 빗물받이, 횡단빗물받이 신설 및 개량 : N=156개소 등

○ 사 업 비 : 2,261,859천원

(도급비 1,605,000천원, 관급비 385,677천원, 폐기물처리비 등 이설비 271,182천원)

○ 공사기간 : 2017. 2. 21 ∼ 2017. 12. 31

○ 시 공 자 : 청누리종합건설(주)  대표 박 찬 석

▣ 추가예산 현황

연번	예 산 명	예 산 액(백만원)			비 고
		계	구 비	시 비
1	사당동 1031-1~24외1개소 하수관로 개량공사	710		710	재배정사업
2	저지대지하침수방지 사업	45	45		구재난관리기금 추가 작업
3	수문보수보강 공사	100	100		구재난관리기금 추가 작업
	계	855	145	710

▣ 설계변경 검토내용

▶ 설계변경 사유 (붙임 보고서 참조)

◦ 현장여건 변동 및 공종별 공사시행 물량 증·감으로 인한 물량변경

◦ 신규 공종발생에 따른 물량변경

▶ 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감(-)
하수관 부설	D=250~1000mm	m	1,265	1,265
맨홀설치	1호~3호	개소	56	57	1
빗물받이 신설 및 개량	1호~2호, 횡단빗물받이	개소	156	162	6
아스콘포장		a	39.1	39.1
대방2호수문보수공	단면보수 (t=30~350mm)	M2	44	193	149
저지대지하주택침수방지공	차수판설치	M	69	160	91
도림천 자전거도로 정비공사		식	1	1	-
도림천 제방둔치 정비공사		식	1	1	-
만양로 하수관로 개량공사		식	1	1	-
사당동 1031-1~24 외 1개소 하수관로 개량공		식		1	1

▶ 공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	2,261,859,400	3,206,574,400	증)	944,715,000
도 급 비	1,605,000,000	2,113,540,000	증)	508,540,000
관급자재비	385,677,200	529,591,000	증)	143,913,800
G.I.S조사수수료	36,000,000	41,000,000	증)	5,000,000
이 전 비	83,030,200	345,759,400	증)	262,729,200
폐기물처리비	152,152,000	176,684,000	증)	24,532,000

※추가예산 855백만원, 낙찰차액 90백만원

▣ 일상감사 및 계약심사 내역

요청금액	심사금액	절감액	비 고
2,114,400,000	2,113,540,000	860,000	반영 完

○ 일위대가 및 자재단가 조정

- 신규 제18호표 포장장비 운반 → 사당동 #31 중기운반비로 적용 외1종

▣ 조치계획

○ 일상감사 결과를 설계변경에 반영하고, 수해예방 및 안전사고 예방등 민원해소를 위하여 기확보된 예산범위 내에서 설계변경 시행코자 합니다

붙임 : 1. 설계변경 내역서(3회) 1부.

2. 설계변경 관련방침 각1부.  끝.