투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	클라우드센터 2단계 이전‧구축 사업 주간보고(9월1주차 ~ 3주차)

『클라우드 서비스 확대 적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축』사업의 9월 1주차 ~ 3주차 업무를 아래와 같이 보고합니다.

가. 주요 추진실적(9/4 ~ 9/24)

○ 사업관리

- 착수계 및 사업수행계획서 제출(9/4)

- 착수보고회 개최(9/12) 및 요구사항정의서 작성

○ 면진설비 공사

- 면진이중마루/전기/통신회선/소화약제 업체 합동 미팅(9/6)

- 면진이중마루 구축계획서 작성 및 보고( ~ 9/19)

- 18층 A 시스템실 면진이중마루 시공 개시(9/20 ~ )

○ 상수도사업본부 이전‧이관

- 상수도사업본부 전산장비 이전이관 업무 분석

- 상수도사업본부 방문인사 및 통합회의 (9/7)

- 상수도사업본부 요구사항 및 현황분석( ~ 9/19)

○ 클라우드센터 장비보강

- 서버 취약점점검 관련 업무협의(9/18)

- 가상스토리지 구성관련 서초 데이터센터 현장실사(9/19)

나. 차주 추진계획(9/25 ~ 10/1)

○ 사업관리

- 요구사항정의서 검토

○ 면진설비 공사

- ********************************************

○ 상수도사업본부 이전‧이관

- ********************

- *******************************

○ 클라우드센터 장비보강

- *************************************

붙임 : 주간업무 보고 각 1부.   끝.

주무관	류은희		주무관	박종순		정보자원운영과장	09/25 김기항
협조자
시행	정보자원운영과-4898	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1439	/전송	02-3470-1544	/	ehryu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)