투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(고덕빗물펌프장 유수지 정비공사_금속재울타리)

1. 시설과-1335(2014.04.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하는 『고덕빗물펌프장 유수지 정비공사』 에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 고덕빗물펌프장 유수지 정비공사

나. 관급자재 현황

계 약 명	수 량	계약금액 (수수료포함)	납품기한	계 약 자	비고
고덕빗물펌프장 유수지 정비공사 관급자재 조달구매(금속재울타리)	148경간	48,197,990원	2014.4.20	주식회사 이건환경

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2014 04. 20

- 변 경 : 2014. 05. 02

라. 연기사유 : 관람 데크 변경사항 발생에 따른 납품기한을 연기

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 납품기한 연기검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		시설팀장	홍순철		시설과장	전결 04/21 변규열
협조자
시행	시설과-1336	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동)	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/		/	대시민공개