함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『'14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』 개선계획 통보

1. 귀사의  무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 우리 본부가 ’14. 4. 4일 계약체결하여 시행중에 있는 『’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』에 대하여 사업수행 시 개선사항을 아래와 같이 통보하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 개선(변경) 사항

① 기술협약 내용에 벌점부과 기준 명시

- 굴착확인 시 위치오차가 허용범위 초과할 시에는 0.5점씩 벌점부과

② 사업 참여기술자 점검 실시

- 용역수행중에 인력투입 현황을 일일작업 일지 작성 보고

- 수행계획서 참여기술자와 실제 투입인원 적정여부를 매월 점검실시

③ 3,4급 측량기준점 관리방법 개선

- GIS 프로그램에 측량기준점에 대한 조사 및 설치 내용을 즉시 입력

④ 성과심사 분할실시(연2회 → 연3회)

- 성과심사신청 [당초: 2회(12월, 2월) ⇒ 변경: 3회(9월, 12월, 2월)]

⑤ 준공 성과품 관리방법 개선

- 준공 성과품 인쇄물(종이문서)를 파일형식의 외장하드 CD 납품

따로붙임 1)일일 작업일지(보고양식) 1부

2)용역성과물 변경내역 1부 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중앙항업(주) 대표 박상환,공간정보기술(주) 대표 박경열,새한항업(주) 대표 김여일
주무관	이경희		지리정보과장	오기석		시설안전부장	04/21 윤석우
협조자	주무관	김동구		주무관	김영혁
시행	지리정보과-816	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로51 (합동27-1)	/
전화	02-3146-1554	/전송	02-3146-1529	/	yd162111@seoul.go.kr	/	대시민공개