문서번호	교통운영과-7443
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
오인숙	이용재	04/21 강진동

충정로 중앙버스전용차로

모니터링용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04

도시교통본부

교통운영과

충정로 중앙버스전용차로

모니터링용역 추진 계획

도로의 서비스 여건 변화로 발생할 수 있는 교통불편사항에 대해 교통영향분석 및 사업효과분석을 통해 사업 시행효과를 극대화하고, 시민불편을 최소화하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

○ 용 역 명 : 충정로 중앙버스전용차로 모니터링용역

○ 과업기간 : 과업착수일로부터 300일

○ 추진방법 : 제한경쟁입찰

○ 소요예산 : 50,000천원

○ 용역내용 :

- 충정로 중앙버스전용차로 설치 전․ 후 교통 및 도로여건 세부조사 실시

- 충정로 중앙버스전용차로 설치 전․ 후 교통영향분석 및 사업효과 분석

Ⅱ		세부과업 내용

○ 조사․분석 업무

- 공사시행 전 교통현황 및 여건변화 분석

- 공사시행 중˙후 현장점검 및 조사

- 공사시행 후 교통현황 및 여건변화 분석

- 실시설계를 위한 상세 현장조사

○ 모니터링 업무

- 중앙버스전용차로 시행 전˙후 종합적인 교통상황 분석

- 교통여건변화 분석 및 교통체계변화 분석

- 중앙버스전용차로 시행효과 종합분석

- 민원발생지점 유형별 분석 및 대처방안 수립

- 중앙버스전용차로 설계기준 적정성 분석 및 개선방안 수립

- 중앙버스전용차로 운영개선방안 수립

- 문제지점 재개선 방안 수립

- 중앙버스전용차로 유지관리방안 수립

- 중˙장기 개선방안 수립 등

- 우회도로 확보 등 우회동선 처리방안 수립

- 공사시행 중 교통안전대책 등 중앙버스전용차로 공사를 위한 업무절차 수립

Ⅲ		추진 방법

○ 제한경쟁입찰

- 엔지니어링산업진흥법 제21에 의거 건설부문 중 교통분야에 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의하여 건설부문 중 교통분야의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체이어야 하며,

- 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ		소요 예산

○ 총 용역비 : 약 50,000천원

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통정보 제공 및 교통흐름 개선, 버스서비스 이용제고, 충정로 중앙버스전용차로 설치, 시설비. 끝.