문서번호	한양도성도감-5890
결재일자	2017.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장	문화본부장
채희창	곽동진	심말숙	06/08 고홍석
협 조

한양도성 통합 관제망 구축사업 시행 계획

2017. 06.

문화본부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재 전문가 현장 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 현상변경 허가
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 통합 관제망 구축사업 시행 계획

문화재 보호 및 순성객 안전사고 예방을 위한 한양도성 통합 관제망 구축사업을 아래와 같이 시행하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한양도성 통합 관제망 구축공사

□ 위    치 : 한양도성 백악·인왕·남산구간 일부

□ 백악구간 : 와룡공원, 혜화동전시안내센터 주변 등

□ 인왕구간 : 사직근린공원, 월암공원, 청운공원 등

□ 남산구간 : 다산동성곽길, 백범광장 등

□ 규    모 : CCTV 61대(와룡공원 등 성곽길 총 3.0㎞)

□ 사업기간 : ‘17. 6 ~ ’17. 10

□ 사 업 비 : 470,801천원

< 사 업 구 간 >

	● 2017년 대상 ● 2016년 완료

Ⅱ		추진경위

□ ‘13.10 : 서울 한양도성 보존·관리 및 활용 종합계획

□ ‘14.12 : 서울 한양도성 재난방지시스템 구축 계획

□ ‘15.06 : 서울 한양도성 주변 CCTV 설치 등 통합관제센터 구축계획

□ ‘16.09 : 낙산구간 통합관제망 구축 완료

□ ‘17.04 : 실시설계 완료(와룡·사직 공원 등 7개 지역)

- ‘17.04.04 : 국가지정문화재 현상변경 허가 완료

- ‘17.04.18 : 관계전문가 현장자문

- ‘17.04.24 : 실시설계 준공

□ ‘17.05 : 계약심사 완료

Ⅲ		소요예산

□ 분야별 사업비

(단위 : 천원)

구 분			사 업 비	비고
계			470,801
도 급 비			202,859	계약심사완료
관 급 비	CCTV	HW 장비	197,269	조달수수료 포함
		SW 라이선스	27,332
	방송장비		40,959
	관 급 비 소 계		265,560
기 타	한전수전비		2,382

□ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 통합 관제망 구축 및 운영-문화재방재시설 유지관리(국비)

Ⅳ		발주방법

〈 도급공사 〉

□ 계약방법 : 제한(지역)경쟁입찰

□ 입찰참가자격

□ 정보통신공사업 등록업체(정보통신공사업법제14조)

□ 입찰공고일 기준 서울특별시에 주된 영업소재지를 둔 업체

□ 현장설명 : 미 실시

□ 설계도서(도면 및 내역서)에 CCTV 설치 위치 및 내역 등이 상세히 나와있어 현장설명 대신 설계도서 열람으로 대체

☞ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제15조 제3항(공사의 성질상 현장설명을 할 필요가 없다고 인정될 때)

〈 관급자재 〉

□ 구매방법

구 분		소요예산(천원)	계약방법	비고
계		265,560
CCTV	HW 장비	197,269	중·소기업자간 제한입찰(총액)	재무과
	SW 라이선스	27,332	제3자단가계약	의무조달구매
방송장비		40,959	제3자단가계약	의무조달구매

Ⅴ		향후계획

□ ‘17.06 : 공사발주 및 계약

□ ‘17.10 : 공사시행 및 준공