문서번호	도로보수과-3727
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
우창원		이규철	04/22 김만수
협조	주무관		홍용현
	주무관		김영용

2014년 노후포장도로 정비공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 노후포장도로 정비공사 발주계획

2014년 노후 포장도로 정비공사비가 배정됨에 따라 우리사업소 관내 포장상태가 불량한 구간을 정비함으로서 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민통행에 불편이 최소화 될 수 있도록 공사시행에 철저를 기하고자 함.

관련근거

○ 2014년 도로보수사업 추진계획 (도로보수과-1343,□14.02.12)

○ 2014년도 노후포장도로 정비예산 재배정 통보 (도로관리과-5843,

□14.04.11) - 예산배정금액 : 5,842,000천원

○ 2014년 포장도로 긴급복구공사 발주계획(도로보수과-1596,□14.02.20)

예산 현황 (5,964,053천원)

○ 노후포장도로 정비공사 예산 : 4,792,000천원

○ 굴착복구기금(사후정비)예산 : 1,050,000천원

○ 포장도로 긴급복구 공사예산 : 122,053천원(폐기물 처리용역 및 노면표시공사)

정비노선 선정기준

○ 잦은 포트홀 발생, 소성변형, 균열, 노후 등으로 포장상태가 불량한 도로

○ 민원 발생지역 및 도로 순찰 점검 노후도로

○ 2014년 포장도로정비공사 대상구간 코아채취 결과

○ 2012년, 2013년 포장도로 관리시스템(PMS) 조사결과에 따른 포장평가        지수(SPI)반영하여 노선선정(도로관리과)

발주계획

○ 분리발주시행

- 노후포장도로정비공사 : 예산액 5,842,000천원중 폐아스콘처리 및         노면표시공사(설계,감리포함)비용 754,877천원, 직영자재비 379,298천         원을 제외한 4,707,825천원을 2014년 노후포장도로 정비공사 시행

※ 우리사업소 관내 서울시 포장관리 대표거리(성산로) 조성과 관련           하여 포장물량 미확정 및 측구정비 관리주체 미확정에 따라 기            배정된 예산을 이전비 포함 발주 후 확정시 설계변경 시행.

- 폐기물처리용역, 노면표시 등 부대공사

※ 포장도로 긴급복구공사의 폐기물처리용역 및 노면표시(공사,용역)는

본 공사에 포함하여 시행.

○ 예산배분 현황(5,964,053천원)

- 아스팔트 포장공사 : 5,584,755천원

(포장도로 : 5,462,702천원, 포장도로긴급 : 122,053천원)

- 직영자재비 등 : 379,298천원

○ 예산세부 현황(5,964,053천원)

- 아스팔트 포장공사                                 (단위: 천원)

구분		계	포장공사				폐기물처리용역	노면표시공사 (설계,감리포함)
			소계	도급비	관급비	이전비 및 기타
계		5,584,755	4,707,825	1,276,440	2,884,385	547,000	407,165	469,765
노후포장도로정비공사	포장도로 정비	5,462,702	4,707,825	1,276,440	2,884,385	547,000	340,698	414,179
	포장도로긴급	122,053					66,467	55,586

- 직영자재비                                        (단위: 천원)

구분	계	관급자재 (아스콘)	상온 아스콘 (록하드)	유화 아스팔트	유류비	기 타 (쓰레기봉투, 소모품구입 장비수리, 작업복구입등)
직영자재	379,298	200,000	60,000	14,000	4,000	101,298

○ 발주개요

구 분	계	포장도로정비공사	발주형태
노후포장도로 정비공사	1,556a	o 18개노선 31개소 1,556a - 일반포장 799a - 재생포장 679a - 개질포장 78a	o 일반공개경쟁
폐아스콘처리용역	37,846톤	o 포장정비+긴급복구+직영작업 (30,691 + 5,980 + 1,175)	o 제한경쟁 -건설폐기물수집운반업 -건설폐기물중간처리업 -재생아스콘 생산업체
노면표시공사	102,800m	o 포장정비+긴급복구 -90,000m+12,800m	o 제한경쟁 - 실적제한
노면표시공사설계용역		o 포장정비 + 긴급복구 - 노면표시 설계	o 20백만원 이하로 수의계약
노면표시공사감리용역		o 포장정비 + 긴급복구 - 노면표시 감리	o 20백만원 이하로 수의계약

정비노선현황 : 별첨

공사기간

○ 착공일로부터 ~ 2014. 12. 31일 까지

검토의견

○ 2014년 노후포장도로 정비공사 : 일반공개경쟁

○ 2014년 포장도로정비 노면표시공사 : 제한경쟁(실적제한)

- 도로의 교통안전시설공사(노면표시 도색) 실적이 입찰공고일 기준          최근 10년 이내 단일공사 준공금액 3,000만원 이상의 실적

○ 2014년 포장도로정비 폐아스콘 처리용역 : 제한경쟁

- 건설폐기물 수집․운반업 및 건설폐기물 중간처리업 또는

- 건설폐기물의 재활용촉진에관한법률 시행규칙 제12조 제1항 별표2 제2호

가목(4)에 의한 재생아스팔트콘크리트 생산시설(고정식플랜트)을          갖추고 재생아스콘을 생산하는 업체

○ 2014년 포장도로정비 노면표시공사 설계 및 감리 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관합 법률 시행령 제 25조 제1항

제5호 및 행정자치부 예규 251호 (2007.9.20)

예산과목

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후       포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 및       부대비, 시설비(401-01)

추진일정

○ 2014. 04. 11 : 예산재배정

○ 2014. 04. 18 ~ 21 : 계약심사의뢰(공사, 폐기물)

○ 2014. 04. 30 : 공사발주

○ 2014. 05 ~ 11 : 공사시행

붙임 : 1. 2014년 포장도로 정비공사 설계 내역서 1부.

2. 포장도로 정비 물량 및 위치도 1부.

3. 예산재배정 통보 1부.

4. 2014년 도로보수사업 추진계획 1부.

5. 2014년 포장도로 긴급복구공사 발주계획 1부.

6. 공사별 소요예산 산출 현황 1부.  끝.