투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사공정촉구

1. 하천관리과-6625(2014.4.21.), 안전치수과-6876(2014.4.16.)호와 관련입니다.

2. 하천관리과, 동대문구청으로부터 신이문 빗물펌프장 증설공사 공정지연으로 하절기 수방대비 문제 발생우려가 있다는 지적이 있어 통보하오니, 감리사 및 시공사는 공정추진에 만전을 기하여 2014.5.15.이전 펌프가동이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

가. 추진일정

○ 2014.4.30. : 토목구조물 완료(지하, 조합수조 등)

○ 2014.5.10. : 펌프설치 완료(기전시설 등)

○ 2014.5.11.~ 5.14. : 무부하테스트 시행

○ 2014.5.15. : 펌프가동

따로붙임 : 관련공문 1부. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김학지			방재시설과장					04/22 代오수양
협조자
시행			방재시설부-1996									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8765						/전송			02)3708-8756					/	hjk570@seoul.go.kr												/	대시민공개