투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공기한 연기 승인(강남순환도시고속도로(8공구)건설공사(총괄분)

1. 롯건강8 제2014-47호(2014.3.5.) 및 동기강 2014-35호(2014.3.7.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사의 준공기한을 다음과 같이 승인하오니 준공기한이 도래하기전에 변경계약이 체결될수 있도록 관련 설계도서 제출 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

《준공기한 연기 승인조건》

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사(총차분)

나. 도 급 액 : 변경없음(금221,555백만원)

다. 준공기한 : 당초 2014. 5.30. → 변경 2018. 7.31.

라. 지체상금 : 미부과(도시계획시설결정 및 보상지연)

마. 연기조건

① 강남순환도로 민자구간 접속부 랜딩은 2016. 5.31.까지 완료

② 변경계약 관련 계약서에 추가 명기사항

- 총차 기간은 계약상대자의 업무 편의를 위해 명기한 사항으로, 기간 변경 등을 이유로 간접비 등 계약금액을 조정 할 수 없습니다.

바. 예정공정표(총차분 변경) : 변경 승인.

붙임 : 총차분 예정공정표(변경) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	롯데건설(주) 대표 박창규 귀하,(주)동명기술공단 종합건축사무소 책임감리원 최태규 귀하
주무관	양준식		도시고속도로과장	성선주		토목부장	04/22 노우성
협조자
시행	토목부-7752	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 서소문청사2동) 도시기반시설본부 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	#########@seoul.go.kr	/	대시민공개